현  장  설  명  서

1. 공 사 명 : 유아교육 전시실 조성공사

2. 공사현장 : 희전관 일원

3. 공사범위 및 공사 일반사항

가. 본 공사는 건축, 전기, 설비공사로서 공사시방서, 설계도면, 현장설명서, 계약서에 어느 한쪽만 표기되어 있어도 본 공사에 포함한다.

나. 본 공사는 계약목적물에 대한 시공일괄 총액입찰이며, 계약내역서의 물량/내용과, 설계도면상의 물량/

내용이 상이할 경우 설계도면대로 시공하며 지급자재는 없다

다. 공 내역은 참고자료로 활용하며, 시방서 및 도면(현설포함)에 의거하여 내역을 산출하여야 한다.

라. 공사에 필요한 임시전력 및 용수는 건축주가 제공한다. 단 인입에 필요한 작업은 시공사가 진행한다.

마. 공사의 진행 또는 준공검사 과정에서 안전, 성능, 구조검토 등의 품질의 확보하기 위한 검사를 지시할 수 있으며, 시험기관을 발주처에서 따로 지정할 수 있다.

바. 공사현장 작업에 따른 안전관리, 환경관리에 대한 관련 제반사항(안전사고, 시설물설치, 각종 인허가, 벌금 등)은 시공사 책임으로 한다.

사. 공사현장 내․외부, 지상,지중에 설치된 모든 기존시설물이 공사에 지장을 줄　경우 철거 및　이전　등을 고려한 시공계획서를 감독관에게 제출한　후 승인을 받아 시공사 부담으로 해체,이설한다.

아. 기존시설의 보존이 필요한 경우, 보존대책을 세워 감독관의 승인　후 작업이 이루어져야 하며, 훼손　시에는 시공자의 부담으로 원상복구 하여야 한다.

자. 입찰참가자는 이 공사의 설계 공사금액에 계상된 다음 금액을 조정없이 입찰금액(계약금액)에 반영

하여함(낙찰율 미적용)

국민건강보험료	국민연금보험료	노인장기요양보험료	안전관리비
1,423,988원	1,833,461원	174,723원	2,702,512원

계약금액에 반영된 국민건강보험료,국민연금보험료,노인장기요양보험료,안전관리비,환경보전비는

최종대가 청구시에 관련증빙서류(납입확인서,사용내역서,영수증,사진대장 등)를 제출하여 정산

해야함. 이에 연동하는 일반관리비, 이윤, 부가가치세 등도 함께 정산함

차. 산재,고용보험료는 법정요율에 맞는 금액을 계약금액에 반영 하여야하며,공사 착공시 고용/산재보험

가입증명서 준공시 완납증명서를 제출하여야 한다.

4. 설계변경

가. 경미한 설계변경에 따른 물량정산을 인정하지 않는다.

나. 발주처에서 작성된 설계가 내역서의 단가(물량변동 없음)에 낙찰률을 적용하여 작성되어진 내역서를　계약내역서로 한다.[시공사에서 계약내역서 작성]

다. 본 공사는 시방서 및 도면(현설포함)에 의거한 공사로서 내역서의 품명·수량 누락분, 도면 물량과 상이한 부분이 발생할지라도, 설계변경을 인정하지 않는다.

라. 설계변경시 기존 비목의 증감된 물량의 단가는 계약내역서 단가로 하며, 신규비목 의 단가는 설계변경

당시의 설계가 단가(전문가격조사기관이 발표한 가격정보지)에 낙찰율을 곱한 금액으로 설계 변경한다.

5. 공사 기성대가 지급

가. 기성대가의 지급은 공사완료후(대학 준공검사 승인후)1회 지급한다.

나. 계약시 선급금은 지급하지 않는다.

다. 물가변동으로 인한 가격조정은 인정하지 않는다.

6. 공사재료의 검사

가. 본 공사에 사용할 재료는 별도의 품목지정이 없는한, 품질, 품명　등은 반드시 설계도서와 일치하여　야 한다. 그러나 설계도서에 명확히 규명되지 아니한 것은 표준품　이상으로서 감독관의 승인을 득한　제품이어야 한다.

나. 공사에 사용할 재료는 사용 전에 전부 감독관의 승인과 검사(자재승인요청서 제출)를 받아야 하며 불합격         재료는 즉시 현장에서 반출하고 다시 검사를 받는다.

7. 공사의 착공 및 준공

가. 시공사는 계약의 내용에 따라 착공하여야 하며, 착공 전 발주처에 착공신고서와 공사예정 공정표         ,보험관련서류 등 관련서류를 제출하여 승인을 얻어야 한다.

나. 시공사는 공사완료시 준공검사를 위한 준공계를 제출하여야 하며, 또한 최종 변경도면 1부(a3 및

캐드화일)를 같이 제출하여야 한다.

8. 현장대리인: 건설공사업무 경력 7년 이상의 자로서, 계약된 공사 에 해당하는 국가기술 자격수첩 소지자를 공사 현장 대리인으로 지명하며, 이를 발주처에 통지 및 승인을 득하여야 한다.

상기와 같은 조건을 미충족 시 현장대리인의 교체가 가능하며, 이에 따른 공기, 금전적 손실은 시공사가 부담한다. 또한 현장대리인은 필히 상시 공사현장에 상주를 하여야 하며. 사전 통지 없는 현장대리인의 비상주  2회시는 현장대리인의 교체가 가능하며, 이로 인해 발생되는 공기지연, 금전적 손해는 시공사가 부담한다.

9. 공사기간                                                                                                가. 본 공사 공사기간은 계약일로부터 2022.11.11(금)일 이내로 한다.

나. 날씨, 기타 현장 여건 등에 따른 공사기간의 연장은 일체 인정하지 않는다.

10. 설계도면(A3) /공내역서(CD)/공급

가. 설계도면 /공내역서  경비는 입찰참가자가 부담한다.

나. 설계도면 공급기간 : 2022년 9 월 8 일(목)부터 ~ 2022년 9 월 20 일(화) 12:00까지

※ 주말 및 추석연휴 휴무

다. 공 급 처 : 오피스디포  ☎(053) 582 - 3977

라. 설계도면을 찾아가지 않은 업체는 입찰에 참여할수 없음, 반드시 도면 및 내역 수령표에 인적사항

기입할것

11. 기타

가. 입찰업무 문의 : ☎(053) 589 - 7729 (계명문화대학 총무팀 입찰,계약담당)

나. 공사도면 문의 : ☎(053) 589 - 7788 (계명문화대학 교육환경지원팀 건축담당)

☎(053) 589 - 7773 (계명문화대학 교육환경지원팀 전기,음향담당)

☎(053) 589 - 7730 (계명문화대학 교육환경지원팀 설비담당)

☎(053) 589 - 7926 (계명문화대학 교육환경지원팀 lan담당)

다. 협조사항 : 담당자 부재 시 연락처 성명을 남겨주시기 바랍니다.

◈ 특기사항

[건축]

1. 공사범위내 이동이 필요한 각종 집기, 비품, 기자재 등은 대학내 지정장소 이동하고, 공사완료후 재설         치가 필요한 일부품목에 대해서는 재설치를 하여야 한다

2. 보수용으로 카펫타일 5 BOX를 공사 완료시에 대학측에 제공 하여야한다(공사비포함)

2022년  9월 8 일

계 명 문 화 대 학 교 총 장 [직인생략]